	목 차
	□ 설 계 설 명 서
	□ 시 방 서
	□ 설 계 예 산 서
	□ 일 위 대 가 표
	□ 단 가 산 출 서
	□ 수 량 산 출 서
	□ 설 계 도 면

■ 설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 경륜장 동쪽주차장 등 정비공사

2. 위    치 : 부산광역시 금정구 두구동 669번지 경륜장동쪽주차장 등

3. 목    적

가. 비포장으로 이용률이 저조한 경륜장동쪽주차장의 포장으로 이용 증대와 인근 주차장 혼잡 분산

나. 불필요한 공간 주차장 확대 정비로 대 고객 편의 도모

4. 공사개요

가. 공사규모 : 8,434㎡

- 경륜장동쪽주차장    : 7,821.6㎡

- 정문주차장 등 3개소 : 612.4㎡

나. 공사내용

- 포장공사 : 부지조성, 아스콘포장

- 부대공사 : 주차선 및 족구장 도색

5. 공사기간 : 착공일로부터 30일간

6. 기타사항

- 본 공사의 설계는 건설공사 표준품셈, 건설교통부 제정 건설공사 표준시방서 및 부산광역시

설계지침서 등에 의하여 설계하였음

- 시공자는 공사 진행과정에서 매 공종마다 슬라이드(또는 사진)촬영하여 우리공단에 제출하여야

하며, 기타 기록사진은 매몰, 은폐되는 부위를 누락 없이 기록 촬영하여야 한다.

붙    임 : 공사예정 공정표.  끝

2007년 12월   일

경륜장 동쪽주차장 등 정비공사 설계서

	부산광역시경륜공단

■ 공사 예정공정표

구분	공사예정공정표(착공일로부터 30일)																														비고
	1개월
	1～5					6～10					11～15					16～20					21～25					26～30
공사준비
철거공사
토공사 및 잡석공사
아스팔트 포장
차선 도색
청소 및 준공